Приложение № 9

__________________________	В ООО «Норд Империал»
           (участник тендера)

График выполнения работ 

Tендер на выполнение проектных работ для объекта: «Обустройство Снежного НГКМ. Куст № 2. Техническое перевооружение. Замена АГЗУ» (тендер № К-2026-18)

№ пп	Этапы выполняемых работ	Сроки выполнения работ	
		Начало	Окончание	
1	Предпроектное обследование (обследование объектов, сбор исходно-разрешительной документации, с выездом на объект работ)	01.05.2026	01.06.2026	
2	Разработка проектной документации, передача на рассмотрение и согласование заказчику, корректировка по замечаниям	01.06.2026	01.08.2026	
3	Сопровождении проекта при проведении экспертизы промышленной безопасности рабочей документации (в т.ч. загрузка проектных данных на сайт экспертизы в качестве Заявителя). Регистрация заключения ЭПБ в Сибирском управлении Ростехнадзора.	01.08.2024	01.09.2026	
4	
Авторский надзор
	На период строительства	

			
Должность	Подпись	Ф.И.О.	
			
Дата		М.П.